정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	한궁연습장 신축
② 추진배경	지역어르신들의 건강하고 활기찬 노후 여가문화 활성화 및 건강 증진을 위한 한궁연습 전용공간을 마련하여 노인복지 증진 기여
③ 사업개요	위 치 : 속초시 노학동 284-20외 1필지 내 용 : 신축 1층(연면적 166.77㎡) 사업비 : 500백만원
④ 사업부서	경제복지국 가족지원과		⑤ 담당자	사회복지6급 구제성 행정5급 김상희
⑥ 선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항		⑦ 사업기간	2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 신축계획 수립(가족지원과-5081) ※ 건립요청(사)대한노인회 속초시지회 (회장 김종명) 대노속경 제081호, 2020.10.26		‘21. 2. 10	김철수 시장 정성훈 부시장 박용하 경제복지국장 김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당
○ 신축 설계용역 실시(가족지원과-18025)		‘21. 5. 20	김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당
○ 신축 시행결의(가족지원과-6299) - 건축, 기계, 전기, 통신, 감리		‘22. 2. 22	정성훈 부시장 박용하 경제복지국장 김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당
○ 공사 일시중지 (가족지원과-15877) - 자재(H형강)수급 지연 - 중지일 : 5.4		‘22. 5. 3.	정성훈 부시장 박용하 경제복지국장 김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당
○ 공사 재개 (가족지원과-17688) - 중지기간 : 5.4 ~ 5.19		‘22. 5.19.	정성훈 부시장 박용하 경제복지국장 김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당
○ 신축공사 준공 - 건축, 전기 : 2022. 7. 22. - 감리용역 : 2022. 7.27. - 통신 : 2022. 8. 3. - 기계설비 : 2022. 8. 4.		‘22. 7.22. ~ ‘22. 8. 4.	김성림 부시장 김용구 경제복지국장 김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당

○ 민간위탁운영자 선정 - 위탁계획 수립 : 2022. 9. 5. - 시의회 동의 : 2022. 9. 30. - 신청공고 및 접수 : 2022. 10. 12 ~ 11. 14. - 위원회개최 : 2022. 11. 25. · 위탁운영자 선정 사)대한노인회속초시지회 (회장 김종명) - 위탁계약 체결 : 2022. 12. 9. (운영 2023. 1. ~ 2027. 12.)	‘22. 9. 5. ~ ‘22. 12. 9	이병선 시장 김성림 부시장 김용구 경제복지국장 김상희 가족지원과장 구제성 경로시설담당